과 업 지 시 서

1. 과업명칭

경기도박물관 수장고방수공사

2. 과업목적

경기도박물관 지하 수장고 방수공사를 통해 다년간 발생된 수장고누수문제를 해결하고

수장유물보존의 안정성확보 및 시설물 관리에 만전을 기하기 위함.

3. 과업개요

가. 과 업 명 : 경기도박물관 수장고방수공사

나. 공사기간 : 2016년 10월 4일~ 2016년 11월 2일 ( 30일간 )

다. 소요예산 : 금199,948,000원(금일억구천구백구십사만팔천원)

4. 과업범위

가. 방수면적 : 총 661㎡(바닥면: 605㎡ / 벽체: 56㎡)

나. 내    용

1) 화강석 철거 352㎡(계단 및 벽체일부),

2) 치장벽돌 바닥 철거 402㎡(철거후 재사용),

3) 모래 철거 40㎥,

4) 바탕정리 605㎡,

5) 특허공법 1차방수 661㎡(스카이러버),

6) 특허공법 2차방수 661㎡(스카이패널),

7) 와이어메쉬깔기402㎡,

8) 몰탈바름402㎡,

9) 화강석 붙임352㎡(바닥,벽,두겁대),

10) 모래 깔기40㎥,

11) 치장벽돌 깔기402㎡,

12) 장애인 경사로 스텐손잡이 설치

5. 과업기간

가. 본 과업의 기간은 총 30일간으로 한다.

나. 설치완료 후라도 설치와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는         그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

6. 일반사항

가. 도급자는 설치과정에서 발주처의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행

하여야 한다.

나. 도급자는 본 과업지시서 및 설계도서, 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을

성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한

전적인 책임을 진다.

다. 본 과업 수행과정에서 작성되는 점검내용이 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해

책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가

본공사의 첨부자료로 활용된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.

라. 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업수행상 필요하다고

인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임하에 성실히 수행하여야 한다.

마. 모든 과업수행은 가능한 서면작성을 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등은

천연색 사진으로 필요시 제출하여야 한다.

7. 세부지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 특히

공사범위 내 유아, 청소년 등 관람객의 접근을 방지하는 안전펜스설치 등 사고            예방에 철저를 기하며 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 배상 하여야 한다.

나. 도급자는 현장대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

다. 반입된 자재는 발주자가 지정한 KS 규격품 이상의 물품이 입고되도록 하며 부득이 변경        시에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 하고 이를 어길시에는 공사계약을 취소하고          타 업체가 시공 하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

라. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손시 원상복구한다.

마. 기타 공사 세부 상세내역은 감독자의 지시에 따른다.

8. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사에 사용될 재료 또는    공작물을 검사 및 시험하기 위하여 발주자가 임명한 직원 또는 그의 대리인을 말한다.

9. 공 정 표

도급자는 착공에 앞서 착공계, 시공계획서, 투입인력현황, 보안각서, 공정예정표,

현장 대리인 선임계, 장비투입계획서, 기술면허사본, 시공도 등을 작성 제출하고     감독자의 승인을 받는다.

10. 현장대리인

도급자는 공사 착수전에 현장대리인을 선임함에 있어 과업에 지정한 공사를 기준으로

기술과 경험이 3년 이상인 자로 하며 현장 대리인은 공사 진행 및 기타 일체의        공사사항에 대하여 도급자의 책임과 의무를 다한다.

11. 하자보수기간

본 공사 완료 후 하자보수기간은 3년으로 한다.  끝.